◉산업통상자원부고시제2019-216호

제00000호	관 보	2019. . .(요일)

전원개발사업(신한울원자력 1,2호기) 실시계획 변경

지식경제부고시 제2009-59호(2009.04.03.), 제2009-81호(2009.04.24.), 제2010-19호(2010.02.05.), 제2011-17호(2011.01.28.), 제2012-123호(2012.06.12.), 산업통상자원부고시 제2015-134호(2015.07.13.),  제2015-197호(2015.09.15.), 제2016-111호(2016.06.20.), 제2017-51호(2017.04.14.), 제2018-7호(2018.02.02.), 제2018-238호(2018.12.28.), 제2019-130호(2019.8.14.)에 따라 승인한 신한울원자력 1,2호기 건설사업에 대한 전원개발사업 실시계획을 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의거 계획변경 신고를 수리하여 다음과 같이 고시합니다.

2019년 12월 30일

산업통상자원부장관

1. 사업의 명칭 : 신한울원자력1,2호기 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국수력원자력(주) 사장 정 재 훈

경상북도 경주시 양북면 불국로 1655

3. 사업의 목적

○ 정부의 전력수급기본계획에 의거 2021년 8월 준공을 목표로 신한울원자력 1,2호기를 건설하여 전력공급에 안정을 기하기 위함

4. 사업개요 : 1400MW급 원자력발전시설 2기(APR1400) 및 부속설비

5. 사업의 변경 내용

○ 사업기간변경

- 당초 : 2010. 4. ∼ 2020. 9.(125개월) → 변경 : 2010. 4. ∼ 2021. 8.(136개월)

- 변경사유 : 원전 안전성 강화 조치(신한울 1호기 POSRV 개선품 적용 및 원자력안전기관의 격납건물 철판(CLP) 배면 공극 점검 등)에 따른 사업 기간 연장

○ 해수담수화 시설 면적 변경

- 당초 5,173.1㎡ → 변경 4,918,2㎡(254.9㎡ 감소)

- 변경사유 : 실시설계 변경에 따른 시설물 면적 감소

6. 사업구역의 위치 및 면적

○ 위치 : 경북 울진군 북면 덕천리·고목리·나곡리·부구리, 죽변면 후정리·죽변리 일원

○ 면적 : 2,434,076㎡

구 분	육상	해상	합계
면 적	170만4076㎡	73만0000㎡	243만4076㎡

7. 수용·사용할 토지 등의 명세

○ 지식경제부 고시 제2012-123호(2012.06.12) 및 산업통상자원부고시 제2016-111호(2016.06.20.) 8항, 제2019-130호(2019.8.14) 8항과 동일

8. 시설물 배치(변경사항) : 산업통상자원부 원전산업정책과 및 한울원자력본부 신한울제1건설소에

비치(열람 가능)