(붙임 1)

몽골 위치추적 중앙관제시스템 구축사업

□ 사업개요

◦ 사  업  명	: 몽골 위치추적 중앙관제시스템 구축사업 (Establishment of Central Electronic Monitoring System Project)

◦ 사업실시기관	: 몽골 법내무부 (Ministry of Justice and Home Affairs, MOJHA)

◦ EDCF 지원금액 : 14,686천 달러

◦ 사업목적

- 몽골 신형법의 가택구금형 시행을 위한 위치추적 중앙관제 시스템 구축을 통해 사회적 비용 절감 및 수형인의 인권 제고

◦ 사업범위

사업구성		내 용
본구매	위치추적 중앙관제센터 신축 (건축)	지상 3층, 지하 1층, 연면적 2080m2 규모의 위치추적 중앙관제센터 건물 신축
	위치추적 중앙관제시스템 구축 (ICT System)	Hardware 위치추적 중앙관제센터 건물 내 시설, 장비 및 인프라 구축 (빌딩관리, 통신(광케이블) 연결 포함) 위치추적 전자장치 (Tracking Device) 공급 중앙관제시스템 운영을 위한 장비 및 기자재 공급 및 설치 CEMC 운영을 위한 서버 및 네트워크 구축 중앙관제시스템 운영 SW 개발 CDEA(법집행청) 및 Branch office(31개소) 내 운영관련 기자재 공급 및 설치
교육·훈련		한국초청연수 : 관제센터 운영자 및 위치추적 전자장치 운영 기술자 현지교육훈련 : 서버 및 네트워크, ICT 기자재 운영 실무자
운영유지 지원		사업완공 후 2년간 O&M 지원 전문가 현장 상주(3개월, 한국) 및 현지기술자(2년) 파견 지원
컨설팅서비스		기본설계(건축은 실시설계 포함), 입찰서류 작성지원 중앙관제시스템 운영 SW 설계(EMS) CEMC 구축방안 및 운영방안 설계 및 제시 입찰 및 계약협상 지원 기자재 공급(검수 및 설치) 감리 및 건축 시공 감리 사업완공보고서 작성 지원 등

◦ 사업실시기간 (Project Implementation Period) : 24개월

- 컨설팅서비스는 총 3단계로 구분되어 1단계(6개월) 기본/상세설계 및 입찰지원, 2단계(3개월) 입찰평가 및 계약체결 지원, 3단계(15개월) 구축 사업에 대한 시공 감리 등 총 24개월 소요될 예정

구 분	Y1												Y2												Y3
	3			6			9			12			3			6			9			12			3			4
1. 컨설턴트 선정(4개월)
	ㅊ
2. 기본/상세 설계 및 입찰지원(4개월)
3. 입찰평가 및 계약체결 지원(2개월)
5. 시공 및 감리(15개월)

□ 사업실시지역(Project Area)

◦ 본 사업은 몽골의 수도 울란바타르市 및 몽골 21개 아이막(Aimag)* 전역을 대상으로 실시할 예정임.

* 몽골 내 행정단위, 우리나라 ‘도’의 개념

- 울란바타르市에는 위치추적 중앙관제센터를 신축하고, 중앙관제시스템을 도입할 예정이며, 몽골 전역에 위치한 32개의 법집행청 지청(Branch Office)에는 중앙관제시스템 접속을 위한 PC, 네트워크 장비 등의 기자재가 도입될 예정.

<사업실시지역 지도>

<사업 예정부지 사진>

□ 컨설팅 서비스 주요 내용

<1단계(Phase 1) 기본설계 및 입찰문서 준비>

현장조사 및 요구사항 분석

ICT 시설 및 장비, 인력 등 현황 조사

ICT 및 건축 분야 관련 사업추진현황 및 계획 분석

CEMC 구축방안 및 운영방안 설계 및 제시

통신 네트워크 및 전력, 상수도, 보안시설 등 인프라 현황조사

사업대상지 현장조사, 사업실시기관 및 이해관계자 요구사항 분석

ICT/건축 기본설계(및 실시설계) 실시

위치추적 중앙관제센터 전산자원, ICT 인프라 및 네트워크 설계

센터빌딩 관리 및 보안 관련 장비 설계

중앙관제센터 및 CDEA, Branch office 의 H/W, Office IT Equipment 등 설계

중앙관제시스템 운영 관련 HW, SW(EMS) 설계

건축 관련 구조·공조·전기·토목 등 기본설계 및 실시설계

장비, 시스템별 소요 물량 및 사업비 산출

입찰문서에 요구되는 사양 및 기술적 요구사항 도출

입찰 준비 및 입찰문서 작성 지원

입찰문서 (입찰안내서, 계약일반 및 특수조건, 기술적 요구사항 등)작성

입찰문서의 검토 및 승인 시 기술지원

입찰공고 지원

<2단계(Phase 2) 입찰평가 및 계약협상 지원>

입찰진행 지원

입찰공고 시 행정지원 및 입찰 설명회 개최지원

입찰참가자의 Clarification 요청사항에 대한 답변 작성 지원

입찰평가 지원 및 평가보고서 작성 지원

입찰문서 개찰 및 사전입찰평가 지원

기술제안서 평가보고서 작성지원

가격평가 및 우선 협상 대상자 선정 지원

최종평가결과 보고서 작성 지원

계약체결 지원

우선 협상 대상자와의 계약협상 지원

계약체결 지원

우선 협상 대상자와의 계약협상 지원

입찰문서 대비 변경사항 등 계약서 작성 및 Signing 지원

<3단계(Phase 3) 시공감리>

구축사업자의 실시설계 감리

구축사업자 현장조사계획서 및 결과 검토

실시설계도서 (도면, 시방서, 계산서, 산출내역서) 검토

SW 개발관련 요구사항 분석결과 및 상세설계 내역 검토

사업관리지원 (일정, 품질, 안전, 환경)

시공계획서 및 시공 상세도 검토

시공계획에 따른 공정 진도 및 품질관리

시공 중 안전 및 환경 관리

인허가 및 유관기관 승인 관련 행정지원

자재검수 및 시공감리

시공자재에 대한 리스트 및 기술사양의 준수 여부 확인

주요 ICT 기자재에 대한 공장 검수

CEMC 운영 SW(EMS) 단계별 테스트결과 검토

기자재 선적 전 검수, 현장 반입검수 등 자재관리

장비 설치 및 구축 시 검사 및 입회

시험, 교육훈련, 유지보수 지원계획 검토

구축사업자의 시험계획서 검토

단위시험, 통합시험, PAT(Preliminary Acceptance Test), FAT(Final Acceptance Test) 지원

구축사업자 교육훈련계획 검토 및 실행 관리

구축사업자의 하자관리 및 유지보수 지원계획의 적정성 검토

사업완료보고 및 인수인계(Hand-Over) 지원

구축사업자 준공도서 (도면, 내역서 등) 검토

운영 및 유지보수 절차서 검토

사업완료보고서(Project Completion Report) 작성

기술이전 및 구축 시스템 인수인계 지원

◦ 추정 소요예산 : 1,105천 달러

◦ 컨설팅 서비스 수행 예상기간 : 24개월

◦ 컨설턴트 고용방식 : 대한민국 업체 간 제한경쟁입찰

(Limited Competitive Bidding)

(붙임 2)

대상 기업 자격요건

1. 재무적 능력

o 최근 3년간 주식회사의 외부감사에 관한 법률시행령 제2조에서 정한 외부감사를 필한 업체이거나 이에 준하여 공인회계사로부터 재무제표의 외부감사를 필한 업체로서 아래 요건 중 어디에도 해당하지 않는 업체

가. 최근 6개월 이내 1차 부도 발생 업체

나. 신용정보관리규약에 따라 신용정보시스템의 연체정보, 대위변제, 대지급정보 및 금융질서문란정보에 등록된 거래 업체

다. 최근 3년간 연속 결손발생 업체

2. 기술적 능력

o 관제센터 또는 상황실 ICT System 구축관련 설계 및 감리 수행실적을 보유하고, 하기 관련업무 수행이 가능한 전문인력(또는 전문인력을 보유하고 있는 기업)과 협력 가능업체

- 위치기반 서비스(LBS)의 운영 SW 설계 및 감리를 위한 핵심기술인력 보유 업체

- 중앙관제센터* 건축사업의 설계 및 감리를 위한 핵심기술인력 보유 업체

- 위치추적 중앙관제센터 구축 및 운영방안 설계를 위한 핵심기술인력 보유 업체(또는 업무수행이 가능한 전문인력)

* 관제실 및 서버실을 포함하는 중앙관제센터

3. 경험/실적

o 상기 2항에서 요구하는 조건을 만족하고, 최근 5년 이내에 국･내외에서 관제센터 또는 상황실 ICT System 구축사업의 컨설팅(설계(기본 또는 상세) 및 감리) 용역 실적을 보유한 기관/기업